<참고자료>

□ 광역교통시설 공급대책

<도로시설>

□ 서북부 광역간선도로망 개선안

구 분		번호	노선명			연장 (km)	차로수	공사비 (억원)	시행시기 (년내)	시행주체
개선안	고속 국도	□	제2외곽순환도로 (총57.1km, 19,587억원)	검단JCT∼자유로 법관IC		12.9	6	6,233	2018	건교부
				자유로 법관IC∼국도1호선 문산IC		17.2	6	5,456	2013	건교부
				국도1호선 문산IC∼동두천IC		27.0	6	7,898	2023	건교부
		□	서울∼문산간도로(상암동∼문산)			35.5	4	13,704	2011	건교부/경기도(민자추진)
	도시 고속	□	고양∼인천공항간 도로(장항IC∼인천공항고속도로)			10.0	4	3,191	2013	경기도(민자추진)
		□	제2자유로 (총18km, 4,947억원)		대화IC∼ 강매IC	12.5	6	3,317	2008	파주운정/교하/ 국제전시장
					강매IC∼ 상암동	5.5	6	1,630	2008	파주운정2지구
		□-1	김포고속화도로 (총10.5km, 4,993억원)		행주대교∼고촌	5.0	4→6	1,908	2008	김포양촌지구
					고촌∼김포양촌지구	10.0	6	3,085	2008	김포양촌지구
	국도	□	국도39호선 국대도(관산∼장흥)			7.1	4	1,643	2008	건교부
		□	서울∼문산간 국대도(방화동∼문산)			22.5	4	6,815	2010	건교부
	시군도	□	김포∼관산간도로 (총 21.7km, 7,552억원)	자유로∼지방도310호 운정IC		7.2	6	1,983	2008	파주운정
				지방도310호∼국도1호 가장IC		9.3	6	3,010	2013	고양시
				지방도350호선∼자유로		5.2	6	2,559	2018	김포시, 고양시
		□-1	김포R&D단지~서울간도로 (총 28.4km, 8,791억원)	김포R&D∼양촌		7.4	6	2,276	2018	김포시
				양촌∼서울외발산동		21.0	6	6,515	2008	김포양촌지구
	광역 도로	□	신도시∼신사동간도로(고양 향동동∼서울 신사동)			2.3	4	622	2008	건교부, 서울시, 경기도(고양시)
			수색∼용두동간 연결도로(서울 수색동∼고양 용두동)			4.5	2→4	507	2008
광역 간선 도로망 연결 도로		①	제2자유로 연결 (운정지구∼대화IC)			4.9	6	1,321	2008	파주운정
		②	제2자유로 연결 (교하지구∼송포동)			6.1	4	1,067	2005	파주교하(4.4) 고양시(1.7)
		③	자유로확장(이산포∼문발IC)			10.0	4□8	172	2005	파주교하
		④	대화로 확장(이산포IC∼송포교차로)			2.6	6□8	235	2008	고양시,국제전시장
		⑤	국제전시장 진입도로(전시장∼송포IC)			2.3	10	1,048	2004	국제전시장
		⑥	국제전시장 진입도로(전시장∼장항동)			1.8	6	467	2008	국제전시장
		⑦	금촌∼성석간 도로			5.7	4	589	2013	파주시,파주운정
		⑧	국지도56호선 확장(교하지구∼자유로)			1.4	4→6	86	2004	파주교하
		⑨	파주시 군도1호선 확장			1.0	2→4	78	2004	파주교하
		⑩	운정역∼운정지구연결도로			1.3	6	462	2005	파주운정
		⑪	교하∼일산간 연결도로(교하∼덕이동)			3.2	6∼4	367	2005	파주교하

□ 중·동북부지역 광역간선도로망 개선안

구분	번호	노선명	연장 (km)	차로수 및폭원	공사비 (억원)	시행시기 (년내)	시행주체
고속 국도	□	제2외곽순환도로(포천JCT-화도JCT)	26.5	4	9,016	2018	건교부
국도		동두천우회도로(상패~연천)	11.8	4	1,512	2013	건교부
		국도43호선퇴계원IC우회도로	1.5	4	474	2008	건교부
		국도43호선(포천-철원군계)우회도로	22.4	4	3,718	2023	건교부
		진접-팔야간도로	6.2	4	1,768	2013	건교부
		팔야-내촌간도로	4.3	4→8	598	2013	건교부
국지도		국지도98호선 백석-광사간	11.2	4	1,984	2008	건교부, 경기도
		국지도98호선 고읍-축석간	3.5	4	789	2013	건교부, 경기도
		국지도86호선 연평-사능간	3.4	4	668	2008	남양주진접
		국지도86호선 사능-일패간	3.1	4	322	2013	건교부, 경기도
		국지도56호선 군내~내촌	6.4	4	2,420	2018	건교부, 경기도
시군도		상일IC-미사리간도로	1.7	4→6	284	2008	하남시, 하남풍산
		주내면-의정부시청간도로	7.4	4	1,406	2009	양주군, 의정부시
		덕송-연평간도로	4.8	4	1,079	2013	인근택지개발사업시행자
		연평-진접간도로	3.9	4→6	767	2008	남양주진접
		고읍~회천간 도로	3.9	4→6	394	2013	양주군
		의정부(노원)IC-신곡간확장	4.0	6→8	338	2008	양주고읍, 인근택지개발 사업시행자
	-1	샘재~검단IC도로신설	1.2	4	430	2008	하남시(민자유치)
	-2	감북동~샘재간도로확포장공사	3.8	2→4	304	2004	하남시, 하남풍산지구
지방도		내촌-연하리간도로	11.3	4	2,903	2023	경기도
		연하리-가평간도로	14.6	4	3,386	2023	경기도
		지방도350 마산~하송우간 도로	3.6	2→4	485	2018	경기도
광역 도로		퇴계원-진관IC구간	3.6	2→4	638	2008	건교부, 서울시, 경기도(남양주시)
		태릉-구리IC간 확장	4.5	4→6	852	2008	건교부, 서울시, 경기도(구리시)
		당고개-광전리간 도로	5.2	4	1,675	2008	건교부, 서울시, 경기도(남양주시)
광역간선도로망 연결도로개선안		고읍우회도로	3.1	2→4	559	2008	양주군, 양주고읍
		신풍로	1.31	20→25m	52.6	2008	하남시, 하남풍산
주) 시행주체의 □남양주진접□: 남양주진접지구사업시행자, □양주고읍□ : 양주고읍지구사업시행자, □하남풍산□:하남풍산지구사업시행자

<철도시설>

□ 철도망 개선대책

번호	노선명	연장 (km)	공사비 (억원)	시행시기 (∼년내)	시행주체	비고
54	경원선 덕계역 신설	-	386	2008	철도청
	경원선 회정역 신설	-	431	2008	철도청
	경원선 양주역 신설	-	299	2013	철도청
	경원선 산북역 신설	-	417		철도청
	경원선 봉양역 신설	-	431		철도청
16	경원선 연장(동안~소요산)	2.4	248	2008	철도청	·상위계획을 개선안으로 제시
53	경원선 연장(소요산~연천)	19.6	4,998	2023	철도청	·장래 남북간 철도수요예측치와 주변지역 관련개발계획에 따라 수요증가시 조기개통 검토 제의
30	지하철9호선 연장 (김포공항∼대곡역)	9.6	6,011	2008	추후협의	·수도권광역교통망상의 2020년계획을 2008년 이내로 사업시기 조정하여 개선안으로 제시함
30-2	지하철9호선 연장 (김포공항역∼김포신도시)	21.0	16,722	2010	추후협의	·김포신도시개발에 따른 수요에 대비한 지하철9호선 김포공항역~김포신도시간 연장을 검토
28-1	지하철8호선연장(암사~구리)	7.0	8,152	2009	추후협의	·상위계획 28번과 비교대안검토
28-2	경전철(구리~사능)	7.0	2,399	2013년 이후	추후협의	·구리역에서 도시철도와 경전철과의 환승계획을 검토 ·사능~진접구간은 장래 주변개발계획에 따라 경전철연장을 검토 ·경전철노선은 계획도로 중앙부 이용
55-1	파주운정지구운정선(경의선운정역∼파주운정지구∼파주교하지구∼출판문화단지)	11.6	3,233	2013	파주시 (민자추진)	·지하철3호선연장(대화역∼운정지구∼출판단지)노선과 비교검토

<환승시설>

□ 환승시설(환승주차장) 개선안

권역	시설명	규모 (□)	설치시설	공사비 (억원)	검토내용
서북부	경의선 운정역	10,040	주 차 장 400면 자전거 보관소 100면 보도육교 (B=4m,L=60m)	34.9	장래 주변의 대규모 개발사업(교하/운정)과 복선전철화시에는 이용율이 매우 높게 나타날 것으로 판단
중북부	경원선 주내역	7,530	주 차 장 300면 자전거 보관소 60면 보도육교 (B=4m,L=30m)	12.9	경원선 주내역은 주변의 대규모 개발사업(고읍)으로 복선전철화시 이용율이 높게 나타날 것으로 판단
동북부	경춘선 사능역	2,008	주 차 장 80면	6.0	지하철 8호선과 경춘선 연계지점 제안도로노선 19, 25 신설시 진접지구와 연계 기능
	하남시경전철 5번역	3,765	주 차 장 150면 자전거 보관소 50면 보도육교 (B=4m,L=50m)	17.6	하남시의 주요 개발지역과의 연계, 서울지역과의 연계체계 확보

* 규모는 주차장 단위면적(13□/1면)과 기타부대시설의 면적을 고려하여 대략 산정한 것임

□ 광역 대중교통활성화 대책

<광역버스 운행방안>

□ 수도권북부 사업지구 광역버스 노선(안)

권역	운행구간	노선길이 (km)	비고
서북부	교하지구 - 운정지구 - 310번 지방도 - 고양 - 원당 - 1번 국도- 광화문	39.9	·서비스수준 C (전원착석)를 유지 ·10∼20분간격으로운행
	파주 - 운정지구 - 탄현동 - 대화역 - 정발산역 - 장항 I.C - 자유로 - 여의도	52.9
	파주 - 운정지구 - 탄현동 - 일산역 - 능곡 - 행신동 - 남가좌동 - 신촌	47.8
	교하지구 - 운정지구 - 이산포 I.C - 자유로 - 반포대교 - 강남역 - 양재역	48.6
	파주 - 국도1호선 - 삼송 - 구파발 - 광화문	46.6
	강화 - 국도48호선 - 통진 - 김포 - 개화동길 - 당산역 - 영등포역 - 여의도길 - 마포 - 아현 - 광화문	57.1
	강화 - 김포 - 올림픽대로 - 강남역	43.3
중북부	동두천 - 고읍지구 - 국도 3호선 - 의정부역 - 창동 - 강북구청 - 종로 5가	42.6
	동두천 - 국도 3호선 - 동부간선도로 - 영동대교 - 삼성역	48.3
동북부	내촌 - 47번 국도 - 남양주 진접지구 - 시립공동묘지 - 갈매 - 망우역 - 회기역 - 청량리역 - 종로5가	35.8
	마석 - 46번 국도 - 망우역 - 회기역 - 청량리역 - 종로5가	29.5
	마석 - 46번 국도 - 가운지구 - 영동대교 - 강남역 - 양재역	37.1
	하남 풍산지구 - 상일 - 천호대로 - 강동전화국 - 천호대교 - 군자교 - 종로 5가	26.5

<공영차고지 조정>

□ 수도권 북부지역 공영차고지 확충계획

구 분	차고지 운영현황			공영차고지 확충계획 검토내용
	버스 업체수	버스운행 대수(대)	대당 차고지 면적(□)
파주시	3	132	97.1	·파주시 탄현면 갈현리 일대 - 장래 개발계획 등에 따른 장래 광역버스 수요를 수용할 수 있는 면적 제고
고양시	1	360	61.1	·고양시 일산구 법곳동 일대 - 파주시 등과 연계된 버스서비스 제고 - 장래 개발계획 등에 따른 장래 광역버스 수요를 수용할 수 있는 면적 제고
동두천시	1	35	54.6	-
의정부시	3	254	60.4	·양주군 주내면 남방리 일대 - 동두천시 등과 연계된 버스서비스 제고
남양주시	5	458	53.0	·남양주시 화도읍 답내리 일대 - 장래 개발계획 등에 따른 장래 버스수요에 대비
김포시	3	310	57.0	·김포시 하성면 일원 - 장기 개발계획 등에 따른 장래 버스수요에 대비
구리시	-	218	-	·구리시 토평동 465-162번지 일원 - 차고지 집단화로 민원해소 및 교통안전시설 개선

<대중교통 우선 처리방안>

□ 대중교통 우선처리 선정도로 단계별 시행계획

주) A-1: 1단계(가로변 버스전용차로) → 2단계(버스전용가로) → 3단계(궤도버스 등)

A-2: 1단계(중앙 버스전용차로) → 2단계(버스전용가로) → 3단계(궤도버스 등)

B : 1단계(버스전용가로) → 2단계(궤도버스 등)

구분		도로명(구간)		차로수	구간길이 (km)	단계별 시행대책 유형 1)	비고
서북부	현황 도로	국도48호선	강화∼개화동	6	12.6	A-1	-
		개화동길	개화동∼공항교차로	8	2.6	A-1	-
		자유로	이산포I.C∼양화대교	8∼10	20.7	A-2	-
		대화역∼가라뫼삼거리		6	13.4	A-1	-
		지방도310호선	송산동∼구파발	6	16.6	A-1	-
	계획 도로	파주운정지구∼이산포 I.C		6	6.0	A-1	-
		송포 I.C∼전시장		10	2.3	A-1	-
		지방도310호선	아동동∼송산동	6	3.7	A-1	-
중북부	계획 도로	동부간선	도로연장	10	1.8	A-2	-
동북부	현황 도로	국도47호선	퇴계원∼상봉동	6	5.3	A-1	-
		국도46호선	도동지구∼마석지구	4	9.4	A-1	·국도46호선 냠양주관내 대체우회도로 완공 후 시행
	계획 도로	국도46호선 (제안노선)	동부간선도로 ∼ 국도46호선(금곡I.C) 연계도로	6	12.7	A-1	-
		국지도86호선 (제안노선)	진접 ∼ 구리시 일패동	6	11.7	B	-
		국도43호선(서울시계∼상일I.C)확장 (광역간선도로 검토대상)		8	5.1	A-2	-